공 사  시 방 서

공사명: 0000 아파트 지하주차장 에폭시 보수공사

000 000 관리 사무소

지하 주차장 에폭시 공사 시방서

『 주행로 1mm , 주차면 0.5mm 코팅 』

1. 공사명 : 000  000 아파트 지하주차장 에폭시 보수공사

2. 공사목적 : 지하주차장의 노후화로 인한 주차에 불편 사항을 해소하고 건축               물의 안전과 수명 연장을 목적으로 한다.

3. 공사범위 : 당 아파트 지하주차장 주차면 및 통행로

4. 공사기간 : 낙찰자와 협의 조정

5. 공사면적 :  주차면 - 16,000㎡

통행로 -  6,400㎡

합  계 - 22,400㎡

6. 사용자재 및 개요

1) 에폭시 사용자재(KSF 4921) 삼화,노루,제비,KCC 등 4대 메이커 이거나 동등이상     의  품질 자재

품 명	범 위	두 께
콘타이트(균열보수제)	주차면 , 통행로	균열부 평면 충진
하도(프라이머)	주차면 , 통행로	40𝝻이상
에폭시 중도	통행로	평균 1mm
에폭시 상도	주차면 , 통행로	30𝝻이상

『R-롤라, H-헤라, J-전용공구』

2)제품배합

가. 주제와 경화제 (2액형)의 배율을 엄수하여 전동 믹서로 충분히 교반한다.

3)제품의 특성

가. 내충격성 및 내마모성의 기계적 물성이 우수하여야 한다.

나. 내산성, 내약품성, 내수성, 방진성이 우수하여야 한다.(방수제는 아님)

다. 건조시간이 (20℃ = 30시간)이내여야 하고 다양한 색상이 가능하여야 한다.

4)균열 보수 사용자재 (하이브리드 퍼티재 사용)

품 명	범 위	시 공 방 법
콘- 타이트	바닥 패인부분 및 크랙	U-컷팅 후 충진

『H-헤라, J-전용공구』

가. 주재료가 에폭시 계열로 내구력이 우수하여야 한다.

나. 이음부가 매끄럽고 부착성이 뛰어나야 하며 균열부에서 깨어지지 않아야 한다.

다. 가사 시간이 30분 이상 되어야 하며 건조시간은 20℃에서 3시간 이내어야 한      다.

5)자재입고 및 검수

가. 모든 자재 입고는 현장도착 후 감독관의 검수를 받아 지정장소에 보관하고 현      장대리인은 사용된 빈용기도 한곳에 보관하고 작업일지에 기록한다.

나. 시방서에서 제시된 자재를 반입치 못하였을 경우 동등이상의 품질을 가진 자재     를 증명할 수 있는 시험성적서를 제출하여 감독관의 승인를 거쳐야 사용할수 있     다.

다. 모든 자재는 밀봉된 상태의 제품으로 개봉되지 않은 봉인된 것이어야 한다.

7. 시공방법

시공순서 : 바탕정리(면처리) >> 균열보수 >> 하도작업 >> 중도작업 >> 상도작업

1)바탕정리

가. 표면의 유분, 수분, 먼지 등의 이물질을 완전히 제거한다.

나. 기존 바닥면의 각재를 샌딩 작업중 연삭작업을 하여 표면을 모두 고속회전 기      기로 면갈이 하여 기존 각재의 들뜬 부분들과 탈락 부분 등은 모두 제거한다.

다. 줄눈에 들어간 이물질과 콘크리트 균열에 메워진 불순물을 제거한다.

라. 바닥면의 탈락부분을 유,무기 하이브리드 퍼티로 보수하고 균열부분도 충진하여       평면으로 면처리 하여 하도 작업 전 바탕면을 충분히 보수하여야 한다.

2)균열보수

가. 3mm 이상으로 심한 균열은 그라인더로 컷팅 후 유무기 하이브리드 퍼티재로       충진하여 보수한다.(크랙면만 먼저 컷팅 후 하도처리 하여 균열보수)

나. 바닥면의 비슷켓 현상 부분은 강도가 나오는 콘크리트 면까지 부분적으로 갈아      내어 하도처리 후 유,무기 하이브리드 퍼티재로 보수하여야 한다.

다. 바닥면의 미세 균열과 3mm 이하 균열은 일반 퍼티재로 보수하여야 한다.

3)하도작업

가. 콘크리트 및 몰탈 소재에 깊이 침투하여 조립자를 고착화 시키고 중도와의 접      착성을 향상시키는 에폭시 수지와 아민 아닥트를 주성분으로 한 상온 경화형       바닥재 하도 도료를 도포 한다.

나. 표면 처리가 끝난 바닥면에 희석재(10%~30%)를 혼합하여 40𝝻도장 한다.

다. 누수가 있는 바닥면은 하도 작업전 인젝션(ARC) 주입으로  보수한다.

5℃ ~ 24시간	20℃ ~ 6시간	30℃ ~ 44시간

라 면처리한 바닥면의 흡수상태에 따라 추가로 2회더 도포하여 양생 할수있다.

4)중도작업

가. 주제와 경화제를 지정된 비율로 혼합한 후 전동교반기로 교반한 후 2분 정도       방치 후 통로면 만을 1mm 이상 도장 한다.

나. 바닥면에 시공시 에폭시의 자체 퍼짐성을 이용하여 전용레기로 골고루 균등하      게 도장 하여야 한다.

1mm ~ 36시간 이상	2mm ~ 48시간 이상	3mm ~ 72시간 이상

다. 면처리 된 부분은 2회로 나눠 도포하여 주변과 평면을 이루게 시공한다.

5)상도작업

가. 중도재의 부실한 부분을 다시 한번 보수보강 하여 손질한다.

나. 주제와 경화제를 규정된 비율로 혼합한 후 로울러 또는 스프레이로 주차면 만      을 40𝝻도장을 1회 한다.

다. 상도를 도포한 후 충분히 양생하여 다시 한번 부실한 부분을 보강 손질한다.

라. 양생된 바닥면에 차선을 시공하여 완공 한다.

8. 에폭시 공사시 준수사항

1)에폭시 공사시 적합한 실내온도는 5℃ ~ 30℃ 사이어야 하며 수분응축을 피하기     위하여 소지면의 표면온도는 이슬점 이상이 되어야 한다.

2)각 도료는 규정된 비율로 혼합하여 재료가 가지고 있는 특성을 살려야 한다.

3)차선은 기존의 차량 대수를 유지하여 시공하여야 하며 변경시 감독관의 승인을      받아야 한다.

4)작업자의 안전 및 입주민의 안전에 만전을 기하여 작업하며 시방서를 준수하여     시공 완료를 하여야 한다.

5)준공검사는 공사가 완료되면 준공계를 제출하여 검사를 받아야 하며 검수가 끝나     준공이 완료되면 작업완료 확인서를 제출하여 당 관리소에서 승인받아야 한다.