아스팔트 보수 공사 시방서

공사명 : 단지 도로 및 지상 주차장 아스팔트 균열 및 박리박탈 부분 보수공사

00 000 000 관리사무소

아스팔트 보수 공사 시방서

1.개요

본 시방서는 당 아파트단지 아스팔트 부분 크랙 및 박리박탈 보수공사에 대한 시공재료와 시공방법 검사 등에 대한 시방으로 본 시방서에 기록 되어있지 않은 사항은 정부재정(국토교통부)표준 시방서에 준한다.

2. 공사범위 - 부분 보수공사

1) 공사구간 : 단지 도로 및 주차장 아스팔트 크랙 (약: 7개소 = 42㎡)

단지 지상도로 아스팔트 박락부분 (약: 5개소 = 6㎡)

단지 지상 주차장 차선 상온식 재도장 (약: 100대 주차)

2) 공사내용 : 아스팔트 크랙부분 전용 균열보수제 아콘으로 보수 보강

아스팔트 박락부분 전용 균열보수제 아콘으로 충진 보수

3. 시공 운영계획

1) 자재 반 출입 : 자재 반입은 감독원의 자재 검수 후 자재송장에 반입을 확인 날인하며 감독원 확인 후 반출한다. (단 자재 반 출입 시는 반 출입된 자재의 품명, 종류, 규격, 수량 등을 확인할 수 있는 송장 및 거래명세표 부본을 첨부한 후 반 출입하여야 한다.

2) 시공감독 : 직원 중 현장 대리인을 선정하여 감독을 임명하고 준공검사조서 시공감독 운영을 총괄한다.

3) 기타사항 : 시방서에 기재된 대로 재료와 시공방법이 적용 되는가 계속 확인하며, 현장 및 공사 공정별 사진을(작업 전,중,후)준공 시 각각 사진첩을 만들어 제출하여야 한다.

4. 시공재료

1) 시공재료 중 감독원이 별도 지정하는 재료에 대해서는 제품별 시험 성적서를 요청시 제출하여야 한다.

2) 아스팔트 균열보수 및 박리박탈 부분 보수자재는 전용(아콘)균열보수제를 사용하여야 하며 필요시 샘플을 제출 할수 있어야 한다.

3) 시공자재는 규격 단위로 반입 되어야 하고 감독관의 검수를 반드시 거처 사용 승인을 득한 제품 이어야 한다.(동등이상 사용가능)

5. 시공작업 (크랙 및 박리박탈 보수)

1) 아스팔트 크랙부분 보수

- 기존의 아스팔트 균열부를 현자 파악하여 공사 시공면의 주변 아스팔트      강도 및 상태를 확인 한다 (0.5Cm미만 균열은 공사범위에서 제외한다)

- 시공면 아스팔트 균열부의 먼지나 이물질을 청소하고 필요시 에어건이나     고압 스프레이로 깨끗이 청소한다.

- 아스팔트 균열부에 아콘을 충진 하여 메우고 쇠손이나 전용 헤라로 충분     히 채워 주변과 평면이 나오게 미장 한다.

- 아스팔트 크랙 아콘 보수 부분은 양생시간을 준수하여 양생하며 완전히      건조된 후에 차선 도장을 하여야 한다.

2) 아스팔트 박리박탈 부분 보수

- 아스팔트의 부실 포트홀이나 박리박탈 부분을 크랙 보수 작업처럼 깨끗      이 청소하고 준비 작업을 한다.

- 아스팔트 보수면에 아콘을 충분히 충진하여 전용 헤라나 쇠손으로 주변      평면과 평탄화 되게 미장하여 보수한다.

- 양생 시간을 준수하고 충격이나 자국이 남지 않도록 통제를 한다.

- 건조 후 추가 작업이 없을시 차선 도장을 한다.

6. 안전관리

- 시공업체는 공사 착수전에 현장 작업자 전원에 대하여 안전교육을 실시      하여야 하며 관리자나 감독관에게 보고 해야 한다.

- 시공업체는 공사중에 발생하는 모든 인사사고 및 기 차량에 관련된 손괴     행위시는 시공업체가 전적으로 책임을 지며, 즉시 원상복구 하여야 한다.  - 시공업체는 공사 중 파손 및 기타 공사 관련 사고에 대하여 책임을 진다.

7. 일반사항

1) 시공업체는 현장 대리인을 선정하여 현장대리인계를 제출하여야 하며 작     업시 항시 현장에 상주하여 작업지시 및 주의사항을 즉시 작업자에게 전     달 교육을 실시하도록 한다.

2) 시공업체는 작업진행과 관련하여 발생된 입주자의 기존 재산피해에 대하     여 즉시 원상복구 및 보상하여야 한다.

3) 시공업체가 공사에 관한 통지, 연락 보고 등을 할 경우에는 반드시 해당     공사감독자를 경유 하여야 한다.

4) 시공자는 감독원의 의사를 존중하고 항상 긴밀히 상호 협의하에 조기 시     공에 만전을 기한다.

5) 시공업체는 시방서에 의한 공사 전반에 대한 세부계획서를 준비하여 감     독원과 상의하고 세부 일정을 조율 하여야 한다.

6) 공사현장에서 공사작업 인원의 출입, 풍기, 위생의 단속, 화재 및 도난      기타사고 발생에 대하여 시공업체 측에서 특히 유의하여야 한다.

7) 공사 시행 편의상 작업시간을 연장 단축할 수 있으나 야간 또는 휴일에     작업을 할 때는 미리 감독원 및 해당부서의 승인을 받아야 한다.

8) 공사완공 까지는 감독원의 지시에 따라 현장 주면 청소, 정리정돈을 완료     한 후 해당 공사의 준공검사를 받아야 한다.

9) 시공업체는 공사 완료 후 준공검사 업무를 충실히 이행하며 준공서류를     첨부 후 준공검사를 받아야 한다.

10) 하자 보증은 2년으로 하며 공사금액의 10%에 해당 한다.

8. 특기사항

1) 공사특성상 거주자 차량 통제로 분쟁의 발생이 빈번 할 수 있으므로 각     별한 주의를 해야 한다.

2) 단지의 주도로와 주차장을 보수공사 하므로 사전에 충분히 공지하여 주     차자의 불편을 최소화 할 수 있는 시공 계획을 알려야 한다.